О результатах подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. 
на 12.09.2023
	
В целях подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа и ООО «УК «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» определены планы ремонтных работ. 
Постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от  25.05.2023 за № 524 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйство в осенне-зимний период 2023-2024 годов»  утверждены план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему период 2023-2024 годов, объемы ремонтных работ жилищного фонда, объемы замены ветхих тепловых  и водопроводных сетей и капитального ремонта  неисправных котлов. Согласно постановлению к предстоящему отопительному сезону  все планируемые работы  должны быть выполнены  с получением паспортов готовности   по бюджетным учреждениям  и объектам жилого фонда – до 15  сентября,  по объектом энергоснабжения – до 1  ноября  текущего года.
 Готовность объектов социальной сферы (образовательные учреждения,  дошкольные  учреждения,  учреждения здравоохранения, ФОК (объекты спорта),  социально значимые объекты (Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Чадукасы,  объекты культуры) к отопительному сезону по оформленным паспортам составляет 100 % (по состоянию на 12.09.2023).
Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП на 2023-2024 годов на отчетную  дату составляет 100%. 

Подготовка к ОЗП 2023-2024 гг. МУП ЖКХ 

        МУП ЖКХ Красноармейского района сообщает, что по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024.г. разработан план мероприятий (План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. по МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа). Согласно плану мероприятий выполнен следующий объем работ:
-	установлены заглушки на запорных арматурах у потребителей в теплоузлах;
-	произведена опрессовка магистральных и квартальных трубопроводов. Выявлены утечки по пер. Комсомольской, ул. Ленина и ул. Васильева;
-	произведена ревизия вентилей, задвижек и обратных клапанов, ЦТП-1, ЦТП-2.
-	произведена ревизия и ремонт дымососов и вентиляторов, сетевых подпиточных насосов, опрессовка котлов после текущего ремонта;
-	заменены экранные трубы диаметром 48 мм. на котлах №№1,2 Центральной котельной;
-	проведена госповерка манометров, 4 манометра подлежат замене;
-	проведена химпромывка котла в центральной котельной.
-	произведена ревизия с устранением утечек водопроводной трассы.
По состоянию на 12 сентября 2023 года заменено труб:
-	теплотрасса - 300 м. при плане 300 м.,
-	водопровод - 70 м. при плане 70 м.

 	В целях исполнения Предписания от 05.04.2021 №43-06-163-186-192-33, выданного Приволжским управлением Ростехнадзора по результатам проверки МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения приняты следующие меры:
      - Разработано и утверждено Положение об организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с действующим законодательством;
-	Разработан и утвержден План работы по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Мероприятия согласно плана выполняются;
-	Разработано и утверждено Положение о проведении технического расследования причин инцидентов на ОПО «Система теплоснабжения МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа»;
-	Работники МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа прошли повышение квалификации в Частном учреждении дополнительного профессионального образования «Чувашский учебно-курсовой комбинат» в области Промышленной безопасности, Эксплуатации систем газопотребления и газораспределения, Электробезопасности и Эксплуатации тепловых установок и сетей. Прохождение аттестации в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору планируется в сентябре 2023 года;
-	Укомплектован штат ОПО «Система теплоснабжения МУП ЖКХ
Красноармейского муниципального округа»;
-	Разработан и утвержден План локализации и ликвидации возможных
аварий на ОПО. Согласован с АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.
Цивильск;
-	Заключен договор на обслуживание ОПО с профессиональным аварийно-
спасательным формированием ООО «РегионСпас»;
-	 Обеспечены Порядок и условия хранения исполнительной и проектной
документации объектов;
-	 Выполнены мероприятия по предотвращению проникновения на ОПО
посторонних лиц. Издан Приказ о недопущении проникновения на ОПО
посторонних лиц;
-	Комплекс мероприятий, включая мониторинг, техобслуживание и ремонт
сети газопотребления выполняется АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в
г. Цивильск согласно договора на обслуживания газового оборудования;
-	Приборы и системы контроля за производственными процессами сданы на
поверку в ФБУ «Чувашский ЦСМ». 
-	Подана заявка на ревизию и ремонт ПКН в АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» в г. Цивильск согласно договора на обслуживание;
-	В связи с отсутствием исполнительной и проектной документации на
котельную «Финского поселка» договор на обслуживание не заключен. В
настоящее время заключен договор на восстановление рабочей документации.