Чǎваш Республики
Муркаш
муниципаллǎ округĕн
администрацийĕ

ХУШУ

________2023 ç. № _____
Муркаш сали

		Чувашская Республика
Администрация
Моргаушского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.04.2023г. №368
с. Моргауши

        В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от    15 марта 2023 № 243-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2019  N 88-р» в целях выполнения в 2023 году комплексных кадастровых работ на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики: 
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, осуществляемых при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.
2.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы – начальника финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики Ананьеву Ренату Иосифовну.

Глава Моргаушского 
муниципального округа                                        А.Н.Матросов

Ананьева Р.И.
62-2-38
Приложение
к распоряжению администрации Моргаушского 
муниципального округа
Чувашской Республики
от 25.04.2023 № 368

Перечень
мероприятий, осуществляемых при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики
N пп	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные
исполнители	Уполномоченное лицо, осуществляющее контроль, должность	
1	2	3	5	6	
1.	Заключение соглашения с Минэкономразвития Чувашии о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение комплексных кадастровых работ
	до 1 мая
2023 г.	Отдел имущественных и земельных отношений
	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа
	
2.	Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ (далее - контракт) в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	до 1 июня 2023 г.	Отдел имущественных и земельных отношений

Отдел организации и проведения муниципальных закупок	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа

Степанов А.И. - начальник отдела организации и проведения муниципальных закупок
	
3.	Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О кадастровой деятельности" 	в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта	Отдел имущественных и земельных отношений совместно с начальниками территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа
	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа
 
Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа
	
4.	Формирование согласительных комиссий по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее - согласительные комиссии) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О кадастровой деятельности"	в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта	Отдел имущественных и земельных отношений 	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа
	
5.	Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с контрактом, предусматривающим выполнение следующих работ:
уточнение местоположения границ земельных участков (при необходимости);
установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при необходимости);
образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами (при необходимости);
образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами (при необходимости);
исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при необходимости)
	в течение сроков, предусмотренных контрактом	Отдел имущественных и земельных отношений совместно с начальниками территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа
	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа
	
6.	Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на заседаниях согласительных комиссий
	до 15 октября 2023 г.	согласительная комиссия	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа
	
7.	Утверждение карты-плана территории	до 20 октября 2023 г.

	Отдел имущественных и земельных отношений 	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа

8.	Направление карты-плана территории в филиал ППК "Роскадастр" по Чувашской Республике - Чувашии в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"	в течение не более 3 рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории	Отдел имущественных и земельных отношений	Ананьева Р.И. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Моргаушского муниципального округа