Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2022 г. N 591 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. N 92"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. N 92 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019 - 2025 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. N 226, от 3 февраля 2020 г. N 39, от 23 декабря 2020 г. N 739, от 29 января 2021 г. N 27, от 28 декабря 2021 г. N 720, от 13 июля 2022 г. N 348) следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова "на 2019 - 2025 годы" заменить словами "на 2019 - 2023 годы";
2) в республиканской адресной программе "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019 - 2025 годы, утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
в наименовании слова "на 2019 - 2025 годы" заменить словами "на 2019 - 2023 годы";
в паспорте Программы:
в позиции "Наименование Программы" слова "на 2019 - 2025 годы" заменить словами "на 2019 - 2023 годы";
позицию "Перечень муниципальных образований - участников Программы" изложить в следующей редакции:

"Перечень муниципальных образований - участников Программы	-	Аликовский муниципальный округ;
Вурнарский муниципальный округ;
Ибресинский муниципальный округ;
Моргаушский муниципальный округ;
Порецкий муниципальный округ;
Урмарский муниципальный округ;
Цивильский муниципальный округ;
Чебоксарский муниципальный округ;
Шемуршинский муниципальный округ;
Янтиковский муниципальный округ;
г. Алатырь;
г. Чебоксары;
г. Шумерля";	

позиции "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы и источники финансирования Программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Программы	-	I этап Программы - 2019 - 2020 годы;
II этап Программы - 2020 - 2021 годы;
III этап Программы - 2021 - 2022 годы;
IV этап Программы - 2022 - 2023 годы	
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы - 706371471,54 рубля, из них средства:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 514291429,08 рубля;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 122583299,63 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 5814809,37 рубля;
финансирование без средств Фонда - 116768490,26 рубля;
местных бюджетов - 69496742,83 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 750971,21 рубля;
финансирование без средств Фонда - 68745771,62 рубля;
в том числе:
I этап Программы - 107559884,08 рубля, из них средства:
Фонда - 93591382,04 рубля;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 12800222,00 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 935715,73 рубля;
финансирование без средств Фонда - 11864506,27 рубля;
местных бюджетов - 1168280,04 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 139883,11 рубля;
финансирование без средств Фонда - 1028396,93 рубля;
II этап Программы - 40552300,06 рубля, из них средства:
Фонда - 39633247,53 рубля;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 567235,70 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 369025,93 рубля;
финансирование без средств Фонда - 198209,77 рубля;
местных бюджетов - 351816,83 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 36497,07 рубля; финансирование без средств Фонда - 315319,76 рубля;
III этап Программы - 0,0 рубля, из них средства:
Фонда - 0,0 рубля;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 рубля;
местных бюджетов - 0,0 рубля;
IV этап Программы - 558259287,40 рубля, из них средства:
Фонда - 381066799,51 рубля;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 109215841,93 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 4510067,71 рубля;
финансирование без средств Фонда - 104705774,22 рубля;
местных бюджетов - 67976645,96 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 574591,03 рубля;
финансирование без средств Фонда - 67402054,93 рубля.
Объемы финансирования Программы могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей консолидированного бюджета Российской Федерации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Чувашской Республики	
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-	за годы реализации Программы планируется выполнение следующих целевых показателей (индикаторов):
строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 15270,49 кв. метра, в том числе:
I этап Программы - 3786,08 кв. метра;
II этап Программы - 1131,52 кв. метра;
III этап Программы - не менее 0,0 кв. метра;
IV этап Программы - 10352,89 кв. метра.
Результаты реализации Программы:
переселение 1021 гражданина, проживающего в 413 аварийных жилых помещениях;
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 15270,49 кв. метра, в том числе:
I этап Программы:
переселение 246 граждан, проживающих в 87 аварийных жилых помещениях;
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 3786,08 кв. метра;
II этап Программы:
переселение 73 граждан, проживающих в 34 аварийных жилых помещениях;
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 1131,52 кв. метра;
III этап Программы - переселение граждан и ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда в рамках указанного этапа не предусмотрены;
IV этап Программы:
переселение 702 граждан, проживающих в 292 аварийных жилых помещениях;
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 10352,89 кв. метра.";	

в разделе I Программы:
в абзаце первом слова "на 2019 - 2025 годы" заменить словами "на 2019 - 2023 годы";
в абзаце втором слова "14,92 тыс. кв. метров" заменить словами "15,27 тыс. кв. метров";
в разделе II Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Настоящая Программа реализуется с 2019 года до 31 декабря 2023 г.:";
абзацы девятый и десятый признать утратившими силу;
в абзаце пятнадцатом слова "на 2019 - 2025 годы" заменить словами "на 2019 - 2023 годы";
абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"переселение 1021 гражданина, проживающего в 413 аварийных жилых помещениях, в том числе:
с финансовой поддержкой Фонда переселение 947 граждан, проживающих в 382 жилых помещениях многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными;";
абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции:
"ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 15270,49 кв. метра, в том числе:
с финансовой поддержкой Фонда ликвидация (снос) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными, общей площадью 14293,29 кв. метра;";
абзацы тридцать второй и тридцать третий изложить в следующей редакции:
"переселение 702 граждан, проживающих в 292 жилых помещениях аварийного жилищного фонда;
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 10352,89 кв. метра;";
абзацы сорок четвертый - сорок восьмой признать утратившими силу;
в разделе V Программы:
в абзаце втором третье предложение исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2023 годах составляет 514291429,08 рубля, в том числе в 2019 году - 93591382,04 рубля, 2020 году - 39633247,53 рубля, 2021 году - 0,00 рубля, 2022 году - 381066799,51 рубля.";
абзацы восьмой - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 706371471,54 рубля, из них средства:
Фонда - 514291429,08 рубля;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 122583299,63 рубля, в том числе софинансирование средств Фонда - 5814809,37 рубля и 116768490,26 рубля без участия средств Фонда;
местных бюджетов - 69496742,83 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 750971,21 рубля;
финансирование без средств Фонда - 68745771,62 рубля;";
абзацы тридцать первый - тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"IV этап Программы - 558259287,40 рубля, из них средства:
Фонда - 381066799,51 рубля;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 109215841,93 рубля;
в том числе софинансирование средств Фонда - 4510067,71 рубля и финансирование без средств Фонда 104705774,22 рубля;
местных бюджетов - 67976645,96 рубля, в том числе:
софинансирование средств Фонда - 574591,03 рубля;
софинансирование без средств Фонда - 17608641,30 рубля;
финансирование без средств Фонда - 49793413,63 рубля.";
абзацы пятьдесят третий - шестьдесят второй признать утратившими силу;
в разделе VI Программы:
в графе 3 позиции 1 слова "СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 883/пр" заменить словами "СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. N 361/пр";
в графе 3 позиции 6 слова ", выполненную в соответствии с пунктом 10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией)" исключить;
приложения N 1-4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям N 1-4 соответственно к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики	М. Ноздряков	

Приложение N 1
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 18.11.2022 N 591

Приложение N 1
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного в установленном порядке
до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе
эксплуатации" на 2019 - 2023 годы

Перечень
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

N пп	Наименование муниципального образования	Адрес многоквартирного дома	Тип	Техническое состояние	Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет)	Год ввода дома в эксплуатацию	Дата признания многоквартирного дома аварийным	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению	Планируемая дата окончания переселения граждан	Площадь застройки многоквартирного дома	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом	
											площадь земельного участка	кадастровый номер земельного участка	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)	
						год	дата	площадь, кв. м	количество человек	количество семей	дата	кв. м	кв. м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Всего подлежит переселению в 2019 - 2023 гг.	х	х	х	х	х	15 270,49	1 021	413	х	15 236,17	48 900,29	х	х	
Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе:	х	х	х	х	х	15 270,49	1 021	413	х	15 236,17	48 900,29	х	х	
расселение которых осуществляется с участием средств Фонда						14 293,29	947	382	х	14 056,57	46 879,29	х	х	
Итого по Аликовскому району				х	х	47,10	1	1	х	148,70	255,00	х	х	
1.	с. Аликово	с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12а	многоквартирный дом	аварийный	нет	1969	30.04.2015	47,10	1	1	31.12.2019	148,70	255,00	21:07:142119:313	сформирован под одним домом	
Итого по Вурнарскому муниципальному округу				х	х	255,40	15	8	х	345,30	1 498,00	х	х	
2.	пгт Вурнары	пгт Вурнары, пер. Коммунальный, д. 10	многоквартирный дом	аварийный	нет	1961	22.04.2016	255,40	15	8	31.12.2023	345,30	1 498,00	21:09:280128:145	сформирован под одним домом	
Итого по городу Алатырю				х	х	1 268,00	74	31	х	1 255,85	10 373,00	х	х	
3.	Алатырь	г. Алатырь, ул. Дорожная, д. 44	многоквартирный дом	аварийный	нет	1950	09.09.2016	83,00	5	2	31.12.2020	107,85	2 765,00	21:03:010237-12	сформирован под одним домом	
4.	Алатырь	г. Алатырь, ул. Кирова, д. 4	многоквартирный дом	аварийный	нет	1890	28.10.2016	164,90	12	4	31.12.2020	139,60	829,00	21:03:010504:3	сформирован под одним домом	
5.	Алатырь	г. Алатырь, ул. Кирова, д. 28	многоквартирный дом	аварийный	нет	1952	22.09.2014	566,70	28	12	31.12.2020	565,10	2 355,00	21:03:010:509:16	сформирован под одним домом	
6.	Алатырь	г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 71	многоквартирный дом	аварийный	нет	1906	01.07.2016	169,10	7	3	31.12.2020	169,10	1 599,00	21:03:010309:8	сформирован под одним домом	
7.	Алатырь	г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 11	многоквартирный дом	аварийный	нет	1952	28.06.2016	159,70	13	6	31.12.2020	149,60	990,00	21:03:010508:35	сформирован под одним домом	
8.	Алатырь	г. Алатырь, ул. Урицкого, д. 35	многоквартирный дом	аварийный	нет	1957	01.07.2016	124,60	9	4	31.12.2020	124,60	1 835,00	21:03:010224:9	сформирован под одним домом	
Итого по городу Чебоксары				х	х	2 080,80	167	63	х	1 773,44	5 586,00	х	х	
9.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Адмирала Ушакова, д. 29	многоквартирный дом	аварийный	нет	1959	28.09.2016	263,50	26	8	31.12.2023	187,90	461,00	21 01 02 02 06 233	сформирован под одним домом	
10.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Адмирала Ушакова, д. 66	многоквартирный дом	аварийный	нет	1960	28.09.2016	223,30	28	7	31.12.2023	182,30	463,00	21 01 02 02 06 230	сформирован под одним домом	
11.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Богдана Хмельницкого, д. 50	многоквартирный дом	аварийный	нет	1961	21.01.2015	521,50	37	16	31.12.2023	367,50	1 414,00	21:01:020206:226	сформирован под одним домом	
12.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 81	многоквартирный дом	аварийный	нет	1956	17.02.2015	474,10	28	12	31.12.2023	330,34	827,00	21:01:010607:139	сформирован под одним домом	
13.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Парижской Коммуны, д. 16А	многоквартирный дом	аварийный	нет	1962	28.09.2016	217,30	25	8	31.12.2023	200,10	599,00	21:01:020206:209	сформирован под одним домом	
14.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Парижской Коммуны, д. 59	многоквартирный дом	аварийный	нет	1959	28.09.2016	171,40	12	6	31.12.2023	169,30	630,00	21 01 02 0206 211	сформирован под одним домом	
15.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Парижской Коммуны, д. 18	многоквартирный дом	аварийный	нет	1960	19.08.2016	86,20	3	2	31.12.2023	234,60	548,00	21 01 02 02 06 208	сформирован под одним домом	
16.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Парижской Коммуны, д. 20	многоквартирный дом	аварийный	нет	1960	28.09.2016	123,50	8	4	31.12.2023	101,40	644,00	21 01 02 02 06 210	сформирован под одним домом	
Итого по городу Шумерля				х	х	4 520,36	265	125	х	4 164,42	14 615,00	х	х	
17.	Шумерля	г. Шумерля, ул. Вильямса, д. 29	многоквартирный дом	аварийный	нет	1968	11.07.2013	120,71	8	3	31.12.2023	1 214,00	1 214,00	21:05:010213:242	сформирован под одним домом	
18.	Шумерля	г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 25	многоквартирный дом	аварийный	нет	1976	30.11.2016	715,38	35	16	31.12.2022	444,69	2 365,00	21:05:010112:88	сформирован под одним домом	
19.	Шумерля	г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 31	многоквартирный дом	аварийный	нет	1974	24.04.2014	569,05	30	16	31.12.2023	620,68	1 736,00	21:05:010112:91	сформирован под одним домом	
20.	Шумерля	г. Шумерля, ул. Олега Кошевого, д. 9	многоквартирный дом	аварийный	нет	1955	18.03.2013	65,60	11	3	31.12.2023	108,40	1 504,00	21:05:010143:2289	сформирован под одним домом	
21.	Шумерля	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 23	многоквартирный дом	аварийный	нет	1959	06.12.2016	266,68	23	8	31.12.2019	160,00	928,00	21 05 010116 86	сформирован под одним домом	
22.	Шумерля	г. Шумерля, ул. Стройучасток, д. 14	многоквартирный дом	аварийный	нет	1965	30.11.2016	94,50	3	3	31.12.2023	161,15	1 389,00	21 05 020115: 249	сформирован под одним домом	
23.	Шумерля	г. Шумерля, ул. Урукова, д. 17	многоквартирный дом	аварийный	нет	1939	19.04.2016	1 015,02	61	30	31.12.2021	719,20	2 496,00	21:05:010122:188	сформирован под одним домом	
24.	Шумерля	г. Шумерля, ул. Урукова, д. 27	многоквартирный дом	аварийный	нет	1946	19.04.2016	1 556,92	82	42	31.12.2023	560,70	1 504,00	21:05:010122:91	сформирован под одним домом	
25.	Шумерля	г. Шумерля, ул. Сурикова, д. 95	многоквартирный дом	аварийный	нет	1962	30.11.2016	116,50	12	4	31.12.2021	175,60	1 479,00	21:05:020104:326	сформирован под одним домом	
Итого по Ибресинскому муниципальному округу			х	х	224,96	22	6	х	527,68	790,00	х	х	
26.	Ибреси	пгт Ибреси, пер. Шпалзавода, д. 9	многоквартирный дом	аварийный	нет	1969	09.06.2016	169,56	14	4	31.12.2023	349,64	600,00	21:10:160123:61	не сформирован	
27.	Ибреси	пгт Ибреси, пер. Юбилейный, д. 1	многоквартирный дом	аварийный	нет	1935	14.11.2015	55,40	8	2	31.12.2023	178,04	190,00	21:10:160206:71	не сформирован	
Итого по Моргаушскому муниципальному округу				х	х	845,90	47	21	х	1 183,30	1 848,10	х	х	
28.	местечко Каршлыхи	местечко Каршлыхи, ул. Центральная, д. 5	многоквартирный дом	аварийный	нет	1955	20.11.2013	79,40	5	2	31.12.2023	85,00	367,20	21:17:049999:168	сформирован под одним домом	
29.	с. Большой Сундырь	с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 17	многоквартирный дом	аварийный	нет	1958	07.11.2013	186,40	8	4	31.12.2023	268,50	309,00	21:17:60402:914	сформирован под одним домом	
30.	с. Большой Сундырь	с. Большой Сундырь, пер. Учительский, д. 1	многоквартирный дом	аварийный	нет	1969	30.12.2013	90,10	9	3	31.12.2023	161,80	400,00	21:17:060401:438	сформирован под одним домом	
31.	с. Юськасы	с. Юськасы, ул. Молодежная, д. 1	многоквартирный дом	аварийный	нет	1979	14.02.2013	117,70	5	4	31.12.2023	333,60	333,60	21:17:270902:79	не сформирован	
32.	с. Юськасы	с. Юськасы, ул. Молодежная, д. 2	многоквартирный дом	аварийный	нет	1980	14.02.2013	372,30	20	8	31.12.2023	334,40	438,30	21:17:270902:75	не сформирован	
Итого по Порецкому району				х	х	975,00	60	18	х	426,13	971,00	х	х	
33.	с. Порецкое	с. Порецкое, ул. Ленина, д. 171	многоквартирный дом	аварийный	нет	1998	10.05.2016	975,00	60	18	31.12.2020	426,13	971,00	21:18:120206:529	сформирован под одним домом	
Итого по Урмарскому муниципальному округу				х	х	752,20	37	17	х	619,40	933,00	х	х	
34.	пгт Урмары	пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 12	многоквартирный дом	аварийный	нет	1952	24.11.2014	384,60	23	9	31.12.2020	345,40	613,00	21:19:170101:468	сформирован под одним домом	
35.	пгт Урмары	пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 14	многоквартирный дом	аварийный	нет	1950	21.02.2014	367,60	14	8	31.12.2023	274,00	320,00	21 19 170101: 467	сформирован под одним домом	
Итого по Цивильскому району				х	х	844,70	65	20	х	612,00	2 446,00	х	х	
36.	с. Чурачики	с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 8	многоквартирный дом	аварийный	нет	1983	08.06.2016	844,70	65	20	31.12.2020	612,00	2 446,00	21:20:240401:293	сформирован под одним домом	
Итого по Чебоксарскому муниципальному округу				х	х	980,70	74	25	х	735,00	1 487,19	х	х	
37.	пгт Кугеси	пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 10	многоквартирный дом	аварийный	нет	1964	19.10.2016	552,50	41	12	31.12.2023	313,00	713,00	21 21 160215 59	сформирован под одним домом	
38.	пгт Кугеси	пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 12	многоквартирный дом	аварийный	нет	1966	19.10.2016	428,20	33	13	31.12.2023	422,00	774,19	21 21 160215 60	сформирован под одним домом	
Итого по Шемуршинскому муниципальному округу				х	х	1 274,17	103	41	х	1 908,10	2 971,00	х	х	
39.	с. Шемурша	с. Шемурша, ул. Космовского, д. 18	многоквартирный дом	аварийный	нет	1987	30.12.2016	974,17	82	33	31.12.2023	804,90	964,00	21 22 1001119: 15	сформирован под одним домом	
40.	с. Шемурша	с. Шемурша, ул. Лесхозная, д. 28	многоквартирный дом	аварийный	нет	1947	30.12.2016	177,20	8	4	31.12.2023	692,10	1 485,00	21 22 1001156: 208	сформирован под одним домом	
41.	с. Шемурша	с. Шемурша, ул. Шоссейная, д. 34	многоквартирный дом	аварийный	нет	1924	30.12.2016	122,80	13	4	31.12.2023	411,10	522,00	21 22 1001157: 56	сформирован под одним домом	
Итого по Янтиковскому муниципальному округу				х	х	224,00	17	6	х	357,25	3 106,00	х	х	
42.	с. Янтиково	с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 8	многоквартирный дом	аварийный	нет	1986	12.10.2016	63,30	5	2	31.12.2023	91,20	1 036,00	21:26:110108:13	сформирован под одним домом	
43.	с. Янтиково	с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 10	многоквартирный дом	аварийный	нет	1986	12.10.2016	134,70	9	3	31.12.2023	180,50	1 286,00	21:26:110108:14	сформирован под одним домом	
44.	с. Янтиково	с. Янтиково, ул. Строительная, д. 19	многоквартирный дом	аварийный	нет	1962	12.10.2016	26,00	3	1	31.12.2023	85,55	784,00	21:26:110108:287	сформирован под одним домом	
расселение которых осуществляется без участия средств Фонда				х	х	977,20	74	31	х	1 179,60	2 021,00	х	х	
Итого по городу Чебоксары				х	х	977,20	74	31	х	1 179,60	2 021,00	х	х	
1.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 12	многоквартирный дом	аварийный	нет	1959	28.10.2014	232,60	15	8	31.12.2023	406,80	730,00	21:01:030201:94	сформирован под одним домом	
2.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 12а	многоквартирный дом	аварийный	нет	1959	28.10.2014	524,30	43	15	31.12.2023	567,80	845,00	21:01:030201:89	сформирован под одним домом	
3.	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 14	многоквартирный дом	аварийный	нет	1959	28.10.2014	220,30	16	8	31.12.2023	205,00	446,00	21:01:030201:109	сформирован под одним домом	

Приложение N 2
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 18.11.2022 N 591

Приложение N 2
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного в установленном порядке
до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе
эксплуатации" на 2019 - 2023 годы

План
реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, по способам переселения

N пп	Наименование муниципального образования	Всего расселяемая площадь жилых помещений	Всего стоимость мероприятий по переселению	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений	
				всего	в том числе	всего	в том числе	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений	
					выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий	договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории	переселение в свободный жилищный фонд		строительство домов	приобретение жилых помещений у застройщиков	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками	предоставление по договорам социального найма	предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования	предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда	предоставление по договорам мены	
										в строящихся домах	в домах, введенных в эксплуатацию						
				расселяемая площадь	расселяемая площадь	стоимость возмещения	субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений	субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом	расселяемая площадь	субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий	расселяемая площадь	расселяемая площадь	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	площадь	площадь	площадь	площадь	
		кв. м	рублей	кв. м	кв. м	рублей	рублей	рублей	кв. м	рублей	кв. м	кв. м	кв. м	рублей	кв. м	рублей	кв. м	рублей	кв. м	рублей	кв. м	рублей	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:	14 293,29	656 578 057,91	755,30	755,30	13 981 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,99	13 537,99	642 596 181,91	2 080,80	151 088 103,88	7 300,67	346 624 364,83	2 593,46	92 491 685,89	1 563,06	52 392 027,31	3 239,92	0,00	0,00	10 298,07	
	Всего по этапу 2019 года	3 786,08	107 559 884,08	721,20	721,20	13 301 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,88	3 064,88	94 258 334,08	0,00	0,00	194,00	6 602 208,00	1 594,68	50 594 615,03	1 276,20	37 061 511,05	362,58	0,00	0,00	2 702,30	
1.	Итого по Аликовскому району	47,10	1 251 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10	1 251 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	1 251 701,34	47,10	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по городу Алатырь	1 268,00	39 491 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00	39 491 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	758,10	24 214 545,00	509,90	15 277 101,59	0,00	0,00	0,00	1 268,00	
3.	Итого по городу Шумерля	266,68	9 075 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,68	266,68	9 075 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237,08	8 068 306,56	29,60	1 007 347,20	67,28	0,00	0,00	199,40	
4.	Итого по Порецкому району	975,00	21 159 558,00	721,20	721,20	13 301 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	253,80	7 858 008,00	0,00	0,00	194,00	6 602 208,00	0,00	0,00	59,80	1 255 800,00	59,80	0,00	0,00	194,00	
5.	Итого по Урмарскому муниципальному округу	384,60	12 224 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	384,60	12 224 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	12 224 141,70	0,00	0,00	0,00	384,60	
6.	Итого по Цивильскому району	844,70	24 357 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,70	844,70	24 357 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	18 311 763,47	245,20	6 045 419,22	188,40	0,00	0,00	656,30	
	Всего по этапу 2020 года	1 131,52	40 552 300,06	34,10	34,10	680 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,42	1 097,42	39 871 974,06	0,00	0,00	1 097,42	39 871 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	295,62	0,00	0,00	801,80	
1.	Итого по городу Шумерля	1 131,52	40 552 300,06	34,10	34,10	680 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,42	1 097,42	39 871 974,06	0,00	0,00	1 097,42	39 871 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	295,62	0,00	0,00	801,80	
	Всего по этапу 2022 года	9 375,69	508 465 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,69	9 375,69	508 465 873,77	2 080,80	151 088 103,88	6 009,25	300 150 182,77	998,78	41 897 070,86	286,86	15 330 516,26	2 581,72	0,00	0,00	6 793,97	
1.	Итого по Вурнарскому муниципальному округу	255,40	12 100 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	255,40	12 100 852,00	0,00	0,00	107,40	5 443 939,52	148,00	6 656 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	
2.	Итого по городу Чебоксары	2 080,80	151 088 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,80	2 080,80	151 088 103,88	2 080,80	151 088 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,90	0,00	0,00	1 212,90	
3.	Итого по городу Шумерля	3 122,16	141 450 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,16	3 122,16	141 450 491,56	0,00	0,00	2 406,78	111 818 736,58	670,18	27 759 525,78	45,20	1 872 229,20	382,06	0,00	0,00	2 740,10	
4.	Итого по Ибресинскому муниципальному округу	224,96	12 528 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,96	224,96	12 528 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,96	12 528 247,36	156,76	0,00	0,00	68,20	
5.	Итого по Моргаушскому муниципальному округу	845,90	36 171 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,90	845,90	36 171 061,90	0,00	0,00	665,30	28 690 429,30	180,60	7 480 632,60	0,00	0,00	604,70	0,00	0,00	241,20	
6.	Итого по Урмарскому муниципальному округу	367,60	20 472 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60	367,60	20 472 011,60	0,00	0,00	367,60	20 472 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	273,70	
7.	Итого по Чебоксарскому муниципальному округу	980,70	54 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,70	980,70	54 417 000,00	0,00	0,00	980,70	54 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	669,30	
8.	Итого по Шемуршинскому муниципальному округу	1 274,17	70 959 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,17	1 274,17	70 959 801,47	0,00	0,00	1 257,47	70 029 761,77	0,00	0,00	16,70	930 039,70	93,50	0,00	0,00	1 180,67	
9.	Итого по Янтиковскому муниципальному округу	224,00	9 278 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	9 278 304,00	0,00	0,00	224,00	9 278 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	152,50	

Приложение N 3
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 18.11.2022 N 591

Приложение N 3
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного в установленном порядке
до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе
эксплуатации" на 2019 - 2023 годы

План
мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

N пп	Наименование муниципального образования	Число жителей, планируемых к переселению	Количество расселяемых жилых помещений	Расселяемая площадь жилых помещений	Источники финансирования Программы	Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств	Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений	
			всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	
				собственность граждан	муниципальная собственность		собственность граждан	муниципальная собственность		за счет средств Фонда	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств местного бюджета		за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд		за счет средств собственников жилых помещений	за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)	
		чел.	ед.	ед.	ед.	кв. м	кв. м	кв. м	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	
	Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:	947	382	294	88	14 293,29	11 053,37	3 239,92	656 578 057,91	514 291 429,08	122 583 299,63	19 703 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по этапу 2019 года	246	87	79	8	3 786,08	3 423,50	362,58	107 559 884,08	93 591 382,04	12 800 222,00	1 168 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Итого по Аликовскому району	1	1	0	1	47,10	0,00	47,10	1 251 701,34	1 239 184,33	11 640,82	876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по городу Алатырь	74	31	31	0	1 268,00	1 268,00	0,00	39 491 646,59	39 096 730,11	316 258,06	78 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по городу Шумерля	23	8	6	2	266,68	199,40	67,28	9 075 653,76	8 984 897,22	69 882,54	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Итого по Порецкому району	60	18	17	1	975,00	915,20	59,80	21 159 558,00	20 947 962,42	199 717,84	11 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Итого по Урмарскому муниципальному округу	23	9	9	0	384,60	384,60	0,00	12 224 141,70	12 101 900,27	114 404,30	7 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Итого по Цивильскому району	65	20	16	4	844,70	656,30	188,40	24 357 182,69	11 220 707,69	12 088 318,44	1 048 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по этапу 2020 года	73	34	25	9	1 131,52	835,90	295,62	40 552 300,06	39 633 247,53	567 235,70	351 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Итого по городу Шумерля	73	34	25	9	1 131,52	835,90	295,62	40 552 300,06	39 633 247,53	567 235,70	351 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по этапу 2022 года	628	261	190	71	9 375,69	6 793,97	2 581,72	508 465 873,77	381 066 799,51	109 215 841,93	18 183 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Итого по Вурнарскому муниципальному округу	15	8	8	0	255,40	255,40	0,00	12 100 852,00	0,00	11 132 783,84	968 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по городу Чебоксары	167	63	37	26	2 080,80	1 212,90	867,90	151 088 103,88	108 590 924,03	33 997 743,89	8 499 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по городу Шумерля	169	83	72	11	3 122,16	2 740,10	382,06	141 450 491,56	140 035 986,64	1 282 466,52	132 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Итого по Ибресинскому муниципальному округу	22	6	1	5	224,96	68,20	156,76	12 528 247,37	12 402 964,89	117 765,53	7 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Итого по Моргаушскому муниципальному округу	47	21	7	14	845,90	241,20	604,70	36 171 061,89	4 377 646,74	29 567 876,10	2 225 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Итого по Урмарскому муниципальному округу	14	8	6	2	367,60	273,70	93,90	20 472 011,60	5 193 714,80	14 514 381,96	763 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Итого по Чебоксарскому муниципальному округу	74	25	18	7	980,70	669,30	311,40	54 417 000,00	40 215 358,95	9 114 317,18	5 087 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Итого по Шемуршинскому муниципальному округу	103	41	37	4	1 274,17	1 180,67	93,50	70 959 801,47	70 250 203,46	674 118,11	35 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Итого по Янтиковскому муниципальному округу	17	6	4	2	224,00	152,50	71,50	9 278 304,00	0,00	8 814 388,80	463 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение N 4
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 18.11.2022 N 591

Приложение N 4
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного в установленном порядке
до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе
эксплуатации" на 2019 - 2023 годы

Планируемые показатели
выполнения республиканской адресной программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019 - 2023 годы

N пп	Наименование муниципального образования	Расселяемая площадь	Количество переселяемых жителей	
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	всего	
		кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Всего подлежит переселению в 2019 - 2023 гг.	2 391,68	1 394,40	1 131,52	1 165,38	9 187,51	15 270,49	152	94	73	61	641	1 021	
	Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:	2 391,68	1 394,40	1 131,52	1 043,98	8 331,71	14 293,29	152	94	73	52	576	947	
	Всего по этапу 2019 года	2 391,68	1 394,40	х	x	x	3 786,08	152	94	x	x	x	246	
1.	Итого по Аликовскому району	47,10	0,00	х	x	x	47,10	1	0	x	x	x	1	
2.	Итого по городу Алатырь	1 080,50	187,50	х	x	x	1 268,00	67	7	x	x	x	74	
3.	Итого по городу Шумерля	266,68	0,00	х	x	x	266,68	23	0	x	x	x	23	
4.	Итого по Порецкому району	719,80	255,20	х	x	x	975,00	46	14	x	x	x	60	
5.	Итого по Урмарскому муниципальному округу	277,60	107,00	х	x	x	384,60	15	8	x	x	x	23	
6.	Итого по Цивильскому району	х	844,70	х	х	х	844,70	0	65	х	х	х	65	
	Всего по этапу 2020 года	х	х	1 131,52	х	х	1 131,52	х	х	73	х	х	73	
1.	Итого по городу Шумерля	х	х	1 131,52	х	х	1 131,52	х	х	73	х	х	73	
	Всего по этапу 2022 года	x	x	x	1 043,98	8 331,71	9 375,69	x	x	x	52	576	628	
1.	Итого по Вурнарскому муниципальному округу	x	x	x	148,00	107,40	255,40	x	x	x	8	7	15	
2.	Итого по городу Чебоксары	x	x	x	0,00	2 080,80	2 080,80	x	x	x	0	167	167	
3.	Итого по городу Шумерля	x	x	x	715,38	2 406,78	3 122,16	x	x	x	35	134	169	
4.	Итого по Ибресинскому муниципальному округу	x	x	x	0,00	224,96	224,96	x	x	x	0	22	22	
5.	Итого по Моргаушскому муниципальному округу	x	x	x	180,60	665,30	845,90	x	x	x	9	38	47	
6.	Итого по Урмарскому муниципальному округу	x	x	x	0,00	367,60	367,60	x	x	x	0	14	14	
7.	Итого по Чебоксарскому муниципальному округу	x	x	x	0,00	980,70	980,70	x	x	x	0	74	74	
8.	Итого по Шемуршинскому муниципальному округу	x	x	x	0,00	1 274,17	1 274,17	x	x	x	x	103	103	
9.	Итого по Янтиковскому муниципальному округу	x	x	x	0,00	224,00	224,00	x	x	x	0	17	17	
	По Программе, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе	0,00	0,00	0,00	121,40	855,80	977,20	0	0	0	9	65	74	
1.	Итого по городу Чебоксары	0,00	0,00	0,00	121,40	855,80	977,20	0	0	0	9	65	74